개별 지방채 발행사업 추진현황 (작성서식 예시)

- 사업별로 별지 작성

사업명

영덕로하스특화농공단지조성사업

담당자

해양수산과 나명석

(☎730-6574)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수산물 가공산업을 지역특화산업으로 육성하여 지역경제활성화 및

일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2014

○ 위 치 : 영덕군 강구면 금호리 1225번지 일원

○ 규 모 : 수산물 특화 농공단지 조성 148,864㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원                                (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	12,000	6,615	3,000	2,385
지 방 채	3,000	3,000
국 비	3,152	200	1,000	1,952
시 도 비	225	15	150	60
시군구비	5,623	3,400	1,850	373
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 농공단지 승인 고시 : 2012.06.15

○ 토지 및 지장물 보상 협의 : 2012.07.20

○ 공사 착공 : 2012.12.07

□ 향후계획

○ 2014.10 : 분양 계획 공고 및 계약

○ 2015.06 : 공사 준공

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

산림생태문화체험단지조성사업

담당자

로하스영덕사업소 박병덕

(☎730-7062)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사업대상지는 1997년 대형산불 피해지로 피해지의 산림복원이 필요

○ 동해안종합개발과 연계한 친환경적 산림생태․문화체험단지의 조성으로

사계절 관광휴양명소 제공

○ 체험 ․ 체류형 다양한 테마공원 조성으로 동해안 관광의 랜드마크로

조성, 체류형 관광유도로 지역경제 활성화와 지역균형발전에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2014년

○ 위 치 : 경북 영덕군 영덕읍 창포리 산26번지 풍력발전단지 일원

○ 규 모 : 광역권근린공원조성A=104㏊

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	34,500	26,600	4,000	3,900
지 방 채	4,500	4,500	-	-
국 비	15,000	11,050	2,000	1,950
시 도 비	4,500	3,315	600	585
시군구비	10,500	7,735	1,400	1,365
기 타	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

○ 2014년도 조경공사 추진중(95%추진중)

○ 2014년도 사방공사 추진중(97%추진중)

□ 향후계획

○ 총괄사업 2014. 09. 23. 준공예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 39,000백만원, 변경 34,500백만원

- 사유 : 부지매입비 당초 9,000백만원, 변경 4,500백만원

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

오션월드조성사업

담당자

로하스영덕사업소 강수진

(☎730-7063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 풍력발전단지 및 해맞이공원과 연계한 새로운 관광인프라 확충

○ 사계절 로하스 해양관광지 조성 극대화로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009 ~ 2013년(5년간)

○ 위 치 : 경북 영덕군 영덕읍 창포리 113-1번지 일원

○ 규 모 : 오션월드공원조성A=7,885㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,000	5,722	278	-	-
지 방 채	2,600	2,600	-	-	-
국 비	1,700	1,561	139	-	-
시 도 비	510	468	42	-	-
시군구비	1,190	1,093	97	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013. 09. 13. 준공

□ 향후계획

○ 해당없음.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 지방재정투융자심사 결과 조건부 사항이었던 열악한 지방재정을 고려하여 사업을 축소하여 시행(당초200억 → 변경60억)