9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 영덕군에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
강구친환경 연안정비사업	38,693	31,565	2,857	4,271	2016	2007	95
소규모수도시설 개량사업	5,845	4,067	286	1,492	계속	2008	70
장사상륙작전 전승 기념공원 조성사업	32,400	29,395	0	3,005	2017	2009	98
웰빙문화테마마을 조성사업	20,000	6,250	1,000	12,750	2018	2009	40
영덕제2농공단지 조성	24,070	10,494	4,468	9,108	2017	2009	68
강구항대게거리 경관개선사업	4,482	3,640	842	0	2016	2010	100
낙동정맥역사문화 산수길조성	50,811	14,736	2,857	33,218	2019	2010	40
로하스수산식품 거점단지조성	25,000	25,000	0	0	2015	2011	95
장사관광지 주변정비사업	10,000	2,000	1,600	6,400	2018	2012	40
농어촌생활용수개발 사업(창수인천지구)	15,226	6,339	2,857	6,030	2017	2012	63
무형문화재 전수관건립사업	4,000	200	1,800	2,000	2016	2012	50
고래불해양복합타운 조성	19,100	8,300	5,280	5,520	2016	2013	65
송천 생태하천복원사업	3,980	840	2,329	162	2015	2013	100
자전거네트워크 구축사업	11,406	8,606	1,599	1,201	2016	2013	95
남정면하수관거정비사업	9,863	714	4,574	4,575	2016	2013	30
영덕로하스수산식품 폐수종말처리시설 설치공사	10,321	4,010	6,311	0	2016	2014	70
영해생활체육공원 축구전용구장 조성	2,000	0	1,000	1,000	2016	2014	98
신정동진(축산항) 미항건설	9,000	0	500	8,500	2018	2015	20
유소년 전용축구장 건립	4,900	0	2,000	1,900	2017	2015	5

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

‣ 각 사업에 대한 자세한 사항은 개별투융자심사 사업 추진현황【별지8】참고

9-2. 지방채 발행사업

우리 영덕군에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
영덕로하스농공단지조성	13,500	3,000	3,152	225	7,123		3,000	95

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

‣ 해당 사업에 대한 자세한 사항은 개별투융자심사 사업 추진현황【별지9】참고

9-3. 민간투자사업

우리 영덕군에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
BTL	영덕군 하수관거정비 BTL 민간투자사업	영덕엔바이로㈜	34,247	22,404	3,763	54,101	2009.11.10 ~ 2029.11.09

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

‣ 해당 사업에 대한 자세한 사항은 개별투융자심사 사업 추진현황【별지10】참고