오십천, 송천 친수공간 조성

관리번호 1 - 7		중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			250	125	-	125	-
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(안전재난건설과)		공약담당	하천팀장 신천희(☎730-6525) 담 당 자 이재준(☎730-6526)

□ 현황 및 정책목표

현 황	치수능력 위주의 하천공간 조성으로 활용미흡
정책목표	치수능력 향상을 기반으로 지역 주민들의 삶의 질 향상이 연계된 복합하천 조성

□ 사업개요 및 추진계획

사업개요

❍ 오십천, 송천 내 친수공간 조성

∙ 영덕군 영덕읍 오십천, 영해면 송천 일원

∙ 수변공원, 산책로, 체육시설 등 조성

연 도 별

추진계획

~’22년	-
’23년	· 하천관리청(경북도) 협의 - 하천법에 따른 하천관리청이 아닌 자의 하천공사에 따른 협의
’24년	· 기본조사용역 ※하천친수계획 친수지구 안정성평가 검토등 · 실시설계용역
’25년	· 사업착수
’26년~	· 사업준공

□ 연도별 재원계획

(단위 : 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	250	-	2	8	80	160
국비	125	-	1	4	40	80
도비	-	-	-	-	-	-
군비	125	-	1	4	40	80
기타	-	-	-	-	-	-

□ 세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
기본계획 수립 및 협의	목표	-	경북도 협의	-	-	-
	실적	-		-	-	-
실시설계 용역	목표	-	-	용역착수/준공	-	-
	실적	-	-		-	-
행정절차 이행 및 사업시행	목표	-	-	하천점용허가	사업착공	사업준공
	실적	-	-		-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 지방하천 내 친수시설로 유수 흐름의 방해하여 하천 범람 등

재해 발생 위험성 증가

※ 22년 태풍 “힌남노” 포항시 냉천 범람으로 인명 및 재산 피해

❍ 치수능력 극대화와 친수 기능의 대안을 마련하여 하천관리청과

(경북도) 협의필요

※ 하천법에 따른 하천관리청이 아닌 자의 하천공사에 따른 협의

❍ 현재 지방하천 내 친수공간 조성에 따른 관련 보조사업(국비)이

없어 전액 군비(250억) 부담

기대효과	군민들의 하천의 친수 이용성 증대 및 삶의 질 향상