주택 공급 확대

관리번호 1 - 9		중앙정부 도움필요성 : 해당없음 , 도움필요(제도 ○, 재정 ○, 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			170	-	-	170	-
사업기간	2022. ~ 2025.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(도시디자인과)		공약담당	건축디자인팀장 고국환(☎730-6356) 담 당 자 김소원(☎730-6354)

□ 현황 및 정책목표

현 황	기존 주거지역 노후화 및 주택 부족
정책목표	노후화된 기존 주거지역 재정비 및 주택공급 확대 공공임대주택 105호 건설

□ 사업개요 및 추진계획

사업개요

❍ 추진내용 : 공약사항 중 경제분야 주택공급 확대를

위해 공공임대주택 105호 건설

❍ 문 제 점 : 사업대상지 확보 어려움

연 도 별

추진계획

~’22년	· 사업추진방안 협의(영덕군 ↔ 경북개발공사) · 지방소멸대응기금 투자계획 검토(미래전략팀)
’23년	· 공공임대주택 실시설계 · 주택사업 승인신청(국토교통부)
’24년	· 공사 착공
’25년	· 사업 완료
’26년~	· 분양 추진

□ 연도별 재원계획

(단위 : 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	170	9	27.5	50	83.5	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
군비	170	9	27.5	50	83.5	-
기타	-	-	-	-	-	-

□ 세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
경북개발공사 업무협약	목표	사업추진방안 협의	-	-	-	-
	실적	협의완료	-	-	-	-
공공임대주택 실시설계	목표	-	용역발주	-	-	-
	실적	-		-	-	-
주택사업승인	목표	-	승인신청	-	-	-
	실적	-		-	-	-
공사 발주 및 착공	목표	-	-	공사발주	-	-
	실적	-	-		-	-
사업 완료	목표	-	-	-	공사완료	-
	실적	-	-	-		-
분양 추진	목표	-	-	-	-	분양추진
	실적	-	-	-	-

□ 2022년까지 추진실적

❍ ’22.  8. : 사업추진방안 협의(영덕군 ↔ 경북개발공사)

❍ ’22.  9. : 지방소멸대응기금 투자계획 검토(미래전략팀)

❍ ’22. 10. : 경북개발공사 업무협의

기대효과	주택부족 해소 및 공기관 직원대상 영덕 거주문화 선도