사계절 해수욕장 관광 활성화

관리번호 2 - 15		중앙정부 도움필요성 : 해당없음 , 도움필요(제도 ○, 재정 ○, 권한 ○)
신규여부	신 규 ○ 계 속		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			139	-	69.5	69.5	-
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(해양수산과)		공약담당	해양관광팀장 은원식(☎730-6294) 담 당 자 추성엽(☎730-6575)

□ 현황 및 정책목표

현 황	계절적 방문객 편증이 심한 해수욕장 주변의 사계절 관광자원 발굴 통한 지역경제 활성화 필요
정책목표	해양관광 수요증가와 휴양 가치 변화에 따라 사계절 머무를 수 있는 휴식 명소 조성

□ 사업개요 및 추진계획

사업개요	❍ 세부사업 ∙ 고래불 해안생태 탐방로 조성 : 79억원 ∙ 해맞이 명소화 : 30억원 ∙ 유휴어항(오보항) 해양레저항 개발 : 20억원 ∙ 대진해수욕장 편의시설 건립 : 12억원 ❍ 사업내용 ∙ 생태탐방로 2.6㎞, 생태공원 10,000㎡ 조성 ∙ 해수욕장 야영장 및 오토캠핑장 조성 ∙ 해양레저항 개발(호안, 계류시설 등 기반시설 및 관리사무소, 해안광장 등 친수시설 조성) ∙ 대진해수욕장 화장실, 샤워장 신축

연 도 별

추진계획

~’22년	· 동해안 해맞이 명소화 사업 도비 확보를 위한 협의 · 고래불해안생태탐방로 조성사업 기본 및 실시설계 · 대진해수욕장 편의시설 건립 실시설계
’23년	· 고래불해안생태탐방로 조성 1차분 착공 · 동해안 해맞이 명소화 사업 기본 및 실시설계 · 유휴어항 해양레저항 개발 실시설계완료 및 착공 · 대진해수욕장 편의시설 건립 착준공
’24년	· 고래불해안생태탐방로 조성 1차분 준공 및 2차분 착공 · 동해안 해맞이 명소화 사업 1차분 착준공 · 유휴어항 해양레저항 개발 착준공
’25년	· 고래불해안생태탐방로 조성 2차분 준공 및 3차분 착공 · 동해안 해맞이 명소화 사업 2차분 착준공
’26년~	· 고래불해안생태탐방로 조성 3차분 준공 · 해수욕장 야영장 및 오토캠핑장 운영

□ 연도별 재원계획

(단위 : 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	139	25	28	34	34	18
국비	-	-	-	-	-	-
도비	69.5	12.5	14	17	17	9
군비	69.5	12.5	14	17	17	9
기타	-	-	-	-	-	-

□ 세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
고래불해안생태탐방로 조성	기본 및 실시설계용역	목표	실시설계착수	실시설계완료	-	-	-
		실적	실시설계 중		-	-	-
	1차 공사	목표	-	1차분 착공	1차분 준공	-	-
		실적	-			-	-
	2차 공사	목표	-	-	2차분 착공	2차분 준공	-
		실적	-	-			-
	3차 공사	목표	-	-	-	3차분 착공	3차분 준공
		실적	-	-	-
해맞이 명소화 사업	기본 및 실시설계용역	목표	-	실시설계	-	-	-
		실적	-		-	-	-
	1차 공사	목표	-	-	1차분 착준공	-	-
		실적	-	-		-	-
	2차 공사	목표	-	-	-	2차분 착준공	-
		실적	-	-	-		-
유휴어항 해양레저항 개발	기본 및 실시설계용역	목표	-	실시설계	-	-	-
		실적	-		-	-	-
	1차 공사	목표	-	1차분 착공	1차분 준공	-	-
		실적	-	-	-	-	-
대진해수욕장 편의시설 건립	실시설계 용역	목표	실시설계	-	-	-	-
		실적	실시설계 완료	-	-	-	-
	편의시설 건립	목표	-	편의시설 건립	-	-	-
		실적	-		-	-	-

□ 2022년까지 추진실적

❍ (고래불 해안생태탐방로 조성)	기본･실시설계 용역 착수(’22. 5월),

’23년 사업비 확보(도비 8억원/군비 8억원)

❍ (동해안 해맞이 명소화 사업)	기본･실시설계 용역 사업비 확보(도비 1억원 /군비 1억원)

❍ (유휴어항(오보항) 해양레저항 개발)	도비 사업비 확보(도비 10억원 /군비 10억원)

❍ (대진해수욕장 편의시설 건립)	실시설계 완료

기대효과	영덕의 대표 해수욕장의 방문객 계절적 편중 개선 및 사계절 머무는 해변 휴식 명소 조성