오십천, 송천 친수공간 조성

관리번호 1 - 7		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			15	-	-	15	-
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진
사업주체	영덕군(건설과)		공약담당	하천팀장 박재홍(☎730-6525) 담 당 자 장효중(☎730-6526)

현    황

치수능력 위주의 하천공간 조성으로 활용미흡

정책목표

치수능력 향상을 기반으로 지역주민들의 삶의 질 향상이

연계된 복합하천 조성

사업개요

❍ 오십천, 송천 내 친수공간 조성

∙ 영덕군 영덕읍 오십천, 영해면 송천 일원

∙ 수변공원, 산책로, 체육시설 등 조성

연 도 별

추진계획

~‘23년	· 오십천, 송천 제방 경관 정비 · 오십천 산책로 확대 조성
’24년	· 송천 주민 보행로 및 맨발걷기길 조성
’25년	· 오십천 하천 준설 및 지장목 제거, 꽃길 정
’26년~	· 유지관리

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	15	-	5	4	3	3
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
군비	15	-	5	4	3	3
기타	-	-	-	-	-	-

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
산책로 조성 및 경관 정비	목표	-	2건	2건	1건	-
	실적	-	2건	2건	-	-
유지관리	목표	-	-	-	-	지속추진
	실적	-	-	-	-	-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’24. 12.)

❍ (하천관리청 협의)

∙ 지방하천(오십천, 송천) 내 친수공간(체육시설, 공원 등) 조성을 위해 하천관리청인 경상북도 협의  ※ 하천법에 따른 하천관리청이 아닌 자의 하천공사에 따른 협의

→  하천 내 시설물 설치, 통수단면 과부족 등 홍수부담을 가중시키는 사업에 대해 중앙부처 등 하천관리청의 입장 부정적

→  지방하천 내 친수시설로 유수 흐름의 방해하여 하천 범람 등 재해 발생 위험성 증가   ※ 22년 태풍 “힌남노” 포항시 냉천 범람으로 인명 및 재산 피해

∙ 적정 하천 공간을 유지하고, 유수 흐름을 방해하지 않는 범위의 사업을 추진(산책로 조성 및 정비, 경관 정비 등)하여 군민 친수공간 조성

❍ ’23년

∙ 오십천 및 송천(창수면 신기~인량리 구간) 제방 경관정비

- 황금사철, 칠자화 등 식재를 통한 화단(가로경관) 조성

❍ ’24년

∙ 송천변 주민 보행로 조성(L=1,128m) 및 맨발걷기길 조성(L=1,500m)

향후계획(’25. 1. ~ )

❍ (사업 변경 추진)

∙ 유수 흐름을 방해하지 않는 범위 내 군민 휴식, 여가 향유공간 마련 등 세부사업내용 변경하여 추진

기대효과	군민들의 하천 친수 이용성 증대 및 삶의 질 향상