경관택지 조성 기반 구축

관리번호 1-8		중앙정부 도움필요성: 해당없음 , 도움필요(제도 ○, 재정 ○, 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			79	-	-	26	53
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(도시디자인과)		공약담당	도시계획팀장 최재식(☎730-6336) 담 당 자 김솔아(☎730-6468)

현    황

열악한 주거환경(노후주택) 및 택지부족에 따른 쾌적한 주거환경에 대한 수요 증대

정책목표

도시지역 내 부족한 택지를 공급하고 자연경관이 양호한 지역에 전원주택단지를 조성

사업개요

❍ 기    간: ’22. 9. ~ ’26. 12.[5년간]

❍ 대 상 지: 영덕군 일원

❍ 사 업 비: 79억원(군 26, 지방소멸대응기금 53)

※ 실시설계 완료 후 총사업비 결정

연 도 별

추진계획

’22년	· 경관택지 조성을 위한 타당성 검토 용역 발주
’23년	· 기본구상안 도출 및 타당성 검토 용역 완료 · 지방소멸대응기금 연계사업 선정
’24년	· 택지 조성 기본 및 실시설계 착수 · 지구단위계획·구역 입안 및 주민의견 청취
’25년	· 지구단위계획·구역 결정 고시 등 행정절차 완료 · 기반시설 실시계획인가 및 사유지 매입 완료 · 공사 착공
’26년~	· 준공 및 분양추진

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	79	-	-	4	75	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
군비	26	-	-	-	26	-
기타	53	-	-	4	49	-

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
사전조사	경관택지 조성 후보지 발굴	목표	용역발주	용역완료	-	-	-
		실적	발주완료	용역완료	-	-	-
계획수립	경관택지 조성 계획 수립	목표	-	용역발주	행정절차	행정절차	-
		실적	-	발주완료	추진중	-	-
기반시설조성	경관택지 조성 사업 시행	목표	-	-	-	사유지매입 및 착공	공사완료
		실적	-	-	-	-	-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’24. 12.)

❍ (경관택지 조성 후보지 발굴)  → 추진완료

∙ 경관택지 타당성검토 용역 완료(’23. 3.)

❍ (경관택지 조성계획 수립)  → 정상추진

∙ 지방소멸대응기금 연계사업 선정(‘23. 9.)

∙ 택지조성 기본 및 실시설계 용역 시행(‘24. 3.)

∙ 도천리 주민 대상 설명회 시행(’24. 9.)

∙ 지구단위계획구역 입안을 위한 토지적성평가 심의(’24. 12.)

∙ 보상계획 공고 실시(’24. 12.)

향후계획(’25. 1. ~ )

❍ (경관택지 조성계획 수립)

∙ 지구단위계획·구역 결정 주민의견청취, 지형도면 고시 등 행정절차완료(‘25. 3.)

❍ (경관택지 조성사업 시행)

∙ 기반시설 실시계획인가 및 사유지 매입(’25. 4.)

∙ 조성사업 공사 착공(‘25. 7.)

∙ 조성사업 공사 준공(’26. 11.)

∙ 분양 추진(‘26. 12.)

기대효과	귀촌마을 조성에 따른 생활인구 및 정주인구 증가