무공해 캠핑·글램핑장 조성

관리번호 2-13		중앙정부 도움필요성: 해당없음 , 도움필요(제도 ○, 재정 ○, 권한 ○)
신규여부	신 규 ○ 계 속		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			37	-	23.4	13.6	-
사업기간	2024. ~ 2025.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(산림과)		공약담당	조경휴양팀장 오창희(☎730-6745) 담 당 자 김태형(☎730-6747)

현    황

산림의 다양한 공익적 기능을 연계한 웰니스 산림휴양문화 창출을 통하여 국민의 행복한 삶과 지역 관광활성화 기여

정책목표

지속가능한 산림경영을 도모하면서 숙박·편의시설 등 산림휴양시설을 설치하여 국민의 휴양을 제공함과 동시에 지역경제 활성화

사업개요

❍ 위   치: 달산면 옥산리 산21번지 일원

❍ 사 업 비: 37억원 (‘25년 16억원)

❍ 사업내용

∙ 숙박시설: 글램핑하우스 10동(A타입 39.93㎡ 6동, B타입 35.23㎡ 4동)

야영장 9면(캐빈하우스 12.88㎡ 5동, 일반야영장 4면)

∙ 편의시설: 캠핑지원센터(127.6㎡/취사장, 샤워장, 화장실)

숲속도서관 실내인테리어(웰니스북카페: 족욕, 음료, 독서)

∙ 기타시설: 바비큐장, 관리창고, 분리수거장 등

연 도 별

추진계획

’22년	· 도 지방재정투자 심사 완료
’23년	· 경상북도 균특전환 사업 예산 신청 및 확정
’24년~	· 실시설계용역 완료, 공종별 공사 시행 및 준공, 개장 및 운영

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	37.0	-	-	21.0	16.0	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	23.4	-	-	13.65	9.75	-
군비	13.6	-	-	7.35	6.25	-
기타	-	-	-	-	-	-

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
예산확정	지방재정투자심사 및 예산확정	목표	지방재정 투자심사완료	예산신청 및 확정	예산신청 및 확정	예산신청 및 확정	-
		실적	심사완료	확정	확정	확정	-
설계용역및착공	실시설계용역 및 공사 착공	목표	-	-	실시설계 완료 및 공사 착공	공사 시행 및 준공	-
		실적	-	-	완료	추진	-
유지관리	바데산자연휴양림 유지관리	목표	-	예산신청	유지관리	유지관리	유지관리
		실적	-	확정	확정	확정	-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’24. 12.)

❍ (바데산자연휴양림 1단계 조성사업 준공)

∙ 바데산 자연휴양림 조성사업(건축, 기반조성, 전기, 통신, 소방 등)

- 산림휴양관(207㎡, 6실), 방문자센터(136㎡), 숲속도서관(200㎡)

❍ (바데산자연휴양림 2단계 조성사업 시행)

∙ 실시설계용역 완료, 휴양림지정구역변경(산림청), 계약원가심사(경북도), 관련 인허가

∙ 공종별 공사 착공(건축, 전기, 통신, 소방, 관련 감리 및 기술지도용역)

❍ (사업 예산 확보)

∙ ‘25년 전환사업비 전액 확보

향후계획(’25. 1. ~ )

❍ (공종별 공사 착공 및 준공)

∙ 건축, 전기, 통신, 소방 등 공종별 공사 시행 및 준공

❍ (자치법규 제정)

∙ 휴양림 관리 운영 조례 제정

❍ (운영계획 수립)

∙ ’26년 상반기 운영 목표로 운영계획 수립

기대효과	숙박시설, 편의시설 등 산림휴양시설을 설치하여 국민의 보건휴양, 정서함양, 산림교육 등을 위한 휴양공간을 제공함과 동시에 지역경제 활성화