블루로드 구간별 테마로드 조성

관리번호 2 - 14		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			146	-	45	54	47
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(문화관광과)		공약담당	블루로드팀장 김재필(☎730-6347) 담 당 자 강병우(☎730-6348)

현    황

전국적 명성을 지닌 블루로드 구간내 새로운 관광자원 발굴로 신규 관광수요와 STAY영덕 관광활성화 계기 필요

정책목표

고속도로, 철도 개통에 따른 특색있는 테마공간 조성으로

블루로드 구간 내 신규 관광자원 발굴

사업개요

❍ 관어대 이색풍경 웰니스관광지 조성사업 / 59억

❍ 해파랑길 19, 22코스 추가개설사업 / 40억

❍ 블루로드 구간별 테마로드 조성사업 / 47억

연 도 별

추진계획

~’22년	· 현장 조사 및 사업계획 구상
’23년	· 투･융자심사, 각종 인허가 및 예산 확보 · 기본계획 및 실시설계용역
’24년	· 구간별 사업 단계별 착공
’25년	· 사업 추진
’26년~	· 준공

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	146	-	10	67	42	27
국비	-	-	-	-	-	-
도비	45	-	5	25	6.5	8.5
군비	54	-	5	25	15.5	8.5
기타	47	-	-	17	20	10

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
실시설계 용역	목표	-	80%	20%	-	-
	실적	-	80%	20%	-	-
행정절차 이행	목표	-	60%	40%	-	-
	실적	-	60%	40%	-	-
공사 발주 등	목표	-	20%	30%	30%	20%
	실적	-	20%	30%		-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’24. 12.)

❍ (기본 및 실시설계 용역) → 완료

∙ 실시설계 완료(해파랑길 22코스 추가개설사업)

∙ 기본계획 완료(블루로드 마스터플랜)

❍ (테마로드 조성)  → 정상추진

∙ 블루로드 구간별 테마로드 조성사업 : ‘23. ~ ’26.

- 쉼터 숲속도서관 조성 : A코스 1개소, B코스 2개소

- 맨발길(황토 1km, 몽돌 1km) 조성 : 노물~석리 L=2km

- 노후 군초소·진지 철거 : B코스 3개소, 군초소(황토) 리모델링 : B코스 1개소

- 출발점 조성 : D코스(부경) 1개소(벽화, 포토존, 소공원, 경관조명 등)

- 인공석 설치 : B코스(창포, 대탄, 축산) 4개소, C코스(관어대) 1개소

- 벽화테마로드 조성 : 부경(출발점)·대탄항, 창포 게스트하우스 L=300m

∙ 관어대 이색풍경 웰니스관광지 조성사업 : ‘24. ~ ’25.(공정률 5%)

※ 군관리계획시설(도로, 주차장) 결정 : 9. 25., 실시계획인가 : 12. 31.

군관리계획시설(궤도) 결정 추진 중

∙ 해파랑길 22코스 추가개설사업 : ‘23. ~ ’25.(공정률 70%)

❍ (유지보수)  → 정상추진

∙ 노후 위험시설물 점검 및 정비(데크시설, 안내판, 낙석방지, 도색, 환경정비 등)

향후계획(’25.1.~ )

❍ (테마로드 조성)

∙ 해파랑길 19코스 해안탐방로 추가개설사업 : ‘25. ~ ’26.

∙ 단계별 사업 발주 : 시작의 해변, 바람의 언덕, 푸른 바다길 등 테마로드 조성

❍ (유지보수) 노후 위험시설물 상시정비(데크시설, 안내판, 낙석방지, 도색, 환경정비 등)

기대효과	특색있는 구간별 테마로드를 조성하여 영덕 관광활성화 및 관광객 유치