사계절 해수욕장 관광 활성화

관리번호 2 - 15		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 ○ 계 속		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			142	-	72	70	-
사업기간	‘22. ~ ’26.		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(해양수산과)		공약담당	해양관광팀장 은원식(☎730-6294) 연안관리팀장 최강락(☎730-6585)

현    황

계절적 방문객 편증이 심한 해수욕장 주변의 사계절 관광자원 발굴 통한 지역경제 활성화 필요

정책목표

해양관광 수요증가와 휴양 가치 변화에 따라 사계절 머무를 수 있는 휴식 명소 조성

사업개요

❍ (세부사업) 고래불 해안생태탐방로 조성(79억원), 해맞이 명소화(30억원), 유휴어항(오보항) 해양레저항 개발(20억원), 대진해수욕장 편의시설 건립(13억원), 영리해수욕장 편의시설(16억), 경정해수욕장 편의시설(10억원)

❍ 사업내용

∙ 생태탐방로 2.6㎞, 생태공원 10,000㎡ 조성

∙ 해수욕장 야영장 및 캠핑장 조성

∙ 해양레저항 개발(호안, 계류시설 등 기반시설 및 관리사무소, 해안광장 등 친수시설 조성)

∙ 대진해수욕장 화장실, 샤워장, 인명구조요원 숙소 등 신축

연 도 별

추진계획

~’22년	· 동해안 해맞이 명소화 사업 도비 확보를 위한 협의 · 고래불해안생태탐방로 조성사업 기본 및 실시설계 · 대진해수욕장 편의시설 건립 실시설계
’23년	· 고래불해안생태탐방로 조성 1차분 착공 · 동해안 해맞이 명소화 사업 기본 및 실시설계 · 유휴어항 해양레저항 개발 실시설계완료 및 착공
’24년	· 고래불해안생태탐방로 조성 1차분 준공 및 2차분 착공 · 동해안 해맞이 명소화 사업 1차분 착준공 · 유휴어항 해양레저항 개발 착준공 · 대진해수욕장 편의시설 건립 착준공
’25년	· 고래불해안생태탐방로 조성 2차분 준공 및 3차분 착공 · 동해안 해맞이 명소화 사업 2차분 착준공
’26년~	· 고래불해안생태탐방로 조성 3차분 준공 · 해수욕장 야영장 및 오토캠핑장 운영

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	142	25	31	43	43	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	72	12.5	14	24	21.5	-
군비	70	12.5	17	19	21.5	-
기타	-	-	-	-	-	-

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
고래불해안 생태탐방로 조성	기본 및 실시설계용역	목표	실시설계착수	실시설계완료	-	-	-
		실적	실시설계 중	실시설계완료	-	-	-
	1차 공사	목표	-	-	1차분 착공	1차분 준공	-
		실적	-		-	-	-
	2차 공사	목표	-	-	-	2차분 착공	2차분 준공
		실적	-	-	-	-	-
해맞이 명소화 사업	기본 및 실시설계용역	목표	-	실시설계완료	-	-	-
		실적	-	실시설계완료	-	-	-
	1차 공사	목표	-	-	1차분 착공	1차분 준공	-
		실적	-	-	1차분 착공	-	-
	2차 공사	목표	-	-	-	2차분 착준공	-
		실적	-	-	-	-	-
유휴어항 해양레저항 개발	기본 및 실시설계용역	목표	-	실시설계완료	-	-	-
		실적	-	실시설계완료	-	-	-
	1차 공사	목표	-	1차분 착공	1차분 준공	-	-
		실적	-	착공	-	-	-
대진해수욕장 편의시설 건립	실시설계 용역	목표	실시설계	-	-	-	-
		실적	실시설계 완료	-	-	-	-
	편의시설 건립	목표	-	-	편의시설 건립	-	-
		실적	-	-	착준공완료	-	-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’24. 12.)

❍ (고래불 해양생태 탐방로) 착공(1차분) ’24. 05.(’25. 5. 완료예정)

❍ (해맞이명소화 사업) 실시설계완료 및 1차분공사 착공완료(’24. 12.)

❍ (유휴어항 해양레저항 개발) 착공 준공 및 사업완료(’24. 12.)

❍ (대진해수욕장 편의시설 건립) 준공완료(’24. 10.)

향후계획(’25. 1. ~ )

❍ (고래불 해양생태 탐방로) ‘2차분 공사 발주·착공(’25. 2.) → 준공(’26. 4.)

❍ (해맞이명소화 사업) 1차분 공사 준공 및 2차분공사 착‧준공

❍ (유휴어항 해양레저항 개발) 시설운영(마을위탁)

❍ (대진해수욕장 편의시설 건립) 마을해수욕장 노후시설 점진적 개선

기대효과	영덕의 대표 해수욕장의 방문객 계절적 편중 개선 및 사계절 머무는 해변 휴식 명소 조성