어르신 복지시설 및 서비스확대(노인복지관 건립)

관리번호 4-31		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속 ○		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후			122	-	-	67	55
사업기간	2023~2028		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(가족지원과)		공약담당	노인복지팀장 송재영(☎730-6214) 담 당 자 이신애(☎730-6216)

현    황

경북도내 노인복지관 미소유 3개시군(영덕, 고령, 성주)

정책목표

체계적인 노인복지서비스로 수준 높은 노후생활 영위

사업개요

❍ 사업명 : 노인복지관 건립(세대이음 공간 조성)

❍ 내  용

∙ 기  간 : 2023~28년(5년간)

※ 건립부지 변경(우곡리→남석리)으로 인한 사전 추진절차 재이행으로 기간연장

∙ 규  모 : 연면적 2,650㎡(801평)

∙ 위  치 : 영덕읍 남석리 34-80번지 일원

∙ 사업비 : 122억(군67, 기금55)

∙ 내  용 : 강당, 프로그램실, 물리치료실, 장난감도서관 등 세대간 화합의 공간 마련

연 도 별

추진계획

’22년	· 타당성 조사 및 기본계획 수립
’23년	· 지방소멸대응기금 투자계획서 제출 및 대면평가
’24년	· 예산확보 및 공공건축 사전심의
’25년	· 실시설계
’26년~	· 공사 착공 및 준공

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	122	-	-	5	1	116
국비	0	-	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-
군비	67	-	-	-	-	67
기타	55	-	-	5	1	49

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
타당성 조사 및 기본계획 수립용역	목표	용역 발주	용역 준공	-	-	-
	실적	발주 완료	발주 완료	-	-	-
공모사업 신청 및 선정	목표	-	공모 선정	-	-	-
	실적	-	선정	-	-	-
실시설계	목표	-	-	-	실시설계	-
	실적	-	-	-	-	-
사업발주	목표	-	-	-	-	착공
	실적	-	-	-	-	-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’24. 12.)

❍ 노인복지관 건립 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 발주(’22. 12.)

❍ (사업위치변경) 당초 영덕읍 우곡리 → 영덕읍 남석리 34-80번지 변경

∙ 사유: 부지민원 미해결 및 주차공간 협소

❍ 예산확보 위한 지방소멸대응기금 투자계획서 제출(’23. 4.)

❍ 2024년 지방소멸대응기금 투자사업대상 선정(‘23. 11. 8.)

❍ 건축기획 용역 발주(’24. 7.)

❍ 공유재산관리계획 심의 및 기본안전보건대장 작성 용역 발주(‘24. 9.)

❍ 공공건축 사전검토 완료(’24. 11.)

향후계획(’25. 1. ~ )

❍ 공공건축 심의(‘25. 1.)

❍ 현상설계 공모 및 실시설계(’25. 2. ~ 26. 5.)

❍ 공사착공(‘26. 7.)

❍ 공사준공(‘28. 7.)

기대효과	수준 높은 노후생활 영위, 주민소통공간으로서 친밀감 형성