응급의료체계 구축 강화

관리번호 4 - 36		중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○, 도움필요(제도 ○, 재정 , 권한 ○)
신규여부	신 규 ○ 계 속		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			52.19	7.75	1	43.44	-
사업기간	2022. ~ 2026.		추진상황	이행완료 후 계속추진
사업주체	영덕군(보건행정과)		공약담당	예방의약팀장 김미애(☎730-6472) 담 당 자 박득수(☎730-6824)

현    황

응급의학과 전문의 인력 수급의 현실적 어려움 존재

정책목표

응급의료인력 충원 및 의료장비 시설 개선, 닥터헬기 이‧착륙장 건설을 통한 응급의료체계 구축 강화

사업개요

❍ 영덕아산병원 응급의료체계 구축강화

∙ 응급실 응급의료인력 증원 및 의료장비 시설개선

❍ 닥터헬기 이 ‧ 착륙장 건설사업 추진

∙ 군내 유일 응급실 운영기관인 영덕아산병원과의 긴급 이송 기반 조성

∙ 영덕닥터헬기장 리모델링으로 이송 체계 인프라 조성 확대

연 도 별

추진계획

’22년	· 응급실 의료인력 채용 및 시설개선 관련 예산협의 · 닥터헬기 이착륙장 국·도비 보조사업 확정
’23년	· 응급실 운영 인력 배치 및 정상운영 · 의료장비 및 시설개선(체혈실 신규 정비) · 닥터헬기 이착륙장 건설 완료
’24년	· 응급실 정상운영 · 닥터헬기 이착륙장 관리유지보수 · 영덕닥터헬기장 리모델링 및 입간판 2개소 설치 완료
‘25년	· 응급실 정상운영 및 구급차량 운영 지원 · 닥터헬기 이착륙장 활용 및 관리

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	52.19	2.76	14.84	11.63	11.48	11.48
국비	7.75	0.8	3.3	1.25	1.2	1.2
도비	1	-	0.9	0.1	-	-
군비	43.44	1.96	10.64	10.28	10.28	10.28
기타	-	-	-	-	-	-

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
응급의료체계구축	응급실 인력배치	목표	채용완료	응급의료 인력배치	정상운영	정상운영	정상운영
		실적	채용공고중	배치완료	정상운영	-	-
	응급실 의료장비 시설개선	목표	소요예산협의	야간검사실 시설개선	정상운영	정상운영	정상운영
		실적	소요예산확정	체혈실 신규정비 완료	정상운영	-	-
	닥터헬기장 설치 및 운영	목표	국도비 예산신청, 예정지확보	시설준공 및 운영	정상운영	정상운영	정상운영
		실적	국도비예산확보 및 기관·부서협의완료	헬기장 건설 완료	닥터헬기 후송 11명	-	-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’24. 12.)

❍ (영덕아산병원 응급의료체계 구축강화)  → 추진완료

∙ 응급실 응급의료인력 중원 및 의료장비 시설 개선 완료

❍ (닥터헬기 이‧착륙장 건설사업 추진)  → 추진완료

∙ 22년 닥터헬기 이착륙장 건설사업 국도비 예산확보 → 명시이월(23. 1. 11.)

∙ 부지 확보 및 이관 : 해당실과소 검토의견 수렴, 공유재산심의, 군계획심의 완료(23. 3. 11.)

∙ 확보부지 사전조성작업 : 전주 이설 , 조경수 이식, 반입 사토 확보 등

∙ 토목공사 용역(시행 23. 3. 10. / 완료 5. 3.)

∙ 실시계획인가 신청(23. 5. 16.)

∙ 전기공사 용역(시행 23. 5. 25. / 완료 6. 14.)

∙ 토목, 전기 공사 계약 ․ 착공(23. 8. 14. ~ 8. 16.)

∙ 토목, 전기 공사 설계변경으로 인한 공기연장(23. 11. 13. → 12 .15.)

∙ 닥터헬기 이·착륙장 건설사업 완공(23. 12. 14.)

∙ 닥터헬기 이·착륙장 이송시연 및 준공식(23. 12. 28.)

∙ 영덕닥터헬기 이·착륙장 리모델링 및 입간판 2개소 설치(24. 10. 11.)

향후계획(’25. 1. ~ )

❍ (영덕아산병원 응급의료체계 구축강화)

∙ 응급의학과 전문의 수급을 위한 적극 홍보 등 인력 유치방안 강구

❍ (닥터헬기 이‧착륙장 관리유지 보수)

∙ 기상예보(태풍, 강우, 강설 등)에 따른 닥터헬기 이‧착륙장 사전 점검

기대효과	응급의료체계 구축에 따른 의료의 질 향상과 유사시 신속한 의료기관 이송으로 군민의 생명 보호