낙후지역 정주여건 개선(농촌공간 정비, 생활권 확대)

관리번호 1 - 4		중앙정부 도움필요성: 해당없음 , 도움필요(제도 ○, 재정 ○, 권한 ○)
신규여부	신 규 계 속		총사업비 (억원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 임기후 ○			259.1	160.4	-	98.7	-
사업기간	2022. ~ 2026. 이후		추진상황	정상추진 중
사업주체	영덕군(농업정책과)		공약담당	농촌개발팀장 박용우(☎730-6451) 담 당 자 이원혁(☎730-6453) 농촌활력팀장 김유리(☎730-6461) 담 당 자 이예빈(☎730-6463)

현    황

일반농산어촌, 권역 단위 등 16지구 운영 및 추진에 따른

운영상 어려움과 지역색 부족으로 시스템 등 개선이 필요

정책목표

읍․면단위, 생활권단위 복지, 문화시설 확충

⇒ 주민주도적 운영, 지역활성화로 살기 좋은 농촌만들기

사업개요

❍ 문화․복지공간 및 기반시설 확충, 복지프로그램 운영,

마을공동체 활성화, 지역서비스 문화 조성 등

∙ 농촌중심지 활성화사업: 영덕읍, 영해면

∙ 기초생활거점조성사업: 달산면, 병곡면, 남정면

∙ 마을만들기 사업: 마을단위 기반시설 확충

연 도 별

추진계획

~’23년	· 농촌중심지 활성화사업 추진(영덕읍) · 기초생활거점 조성 추진(달산면) · 마을만들기 사업 추진(달산면 옥산2리)
’24년	· 농촌중심지 활성화사업 추진(영해면) · 기초생활거점조성 추진(병곡면, 남정면) · 마을만들기 사업 추진(축산면 도곡2리)
’25년	· 농촌중심지 활성화사업 추진(영해면) · 기초생활거점조성 추진(병곡면, 남정면) · 마을만들기 사업 추진(병곡면 이천리, 창수면 미곡2리)
’26년	· 농촌중심지 활성화사업 추진(영해면) · 기초생활거점조성 추진(병곡면, 남정면) · 마을만들기 사업 추진(달산면 매일1리, 영해면 연평2리, 창수면 수리)

연 도 별

재원계획

(단위: 억원)

계		~’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
	259.1	94.3	89.7	50.1	15.0	10.0
국비	160.4	66.0	59.3	30.1	5.0	-
도비	-	-	-	-	-	-
군비	98.7	28.3	30.4	20.0	10.0	10.0
기타	-	-	-	-	-	-

세부 추진일정 및 공약달성 확인지표

확인지표		’22년	’23년	’24년	’25년	’26년
일반농산어촌개발사업 설계 및 공사 착공 건수	목표	1	1	2	-	-
	실적	1	1	2	-	-
일반농산어촌개발사업 설계 및 공사 준공 건수	목표	-	2	-	-	2
	실적	-	2	-	-	-
마을만들기사업 추진 마을 수	목표	1	1	1	1	1
	실적	-	1	1	1	-

현재까지 추진실적(’22. 7. ~ ’25. 12.)

❍ 농촌중심지 활성화, 기초생활거점조성사업 추진

∙ 공사 준공 : 달산면(’23. 7.), 영덕읍(‘23. 12.)

∙ 설계 완료 : 병곡면(’24. 11.), 남정면(’24. 11.)

❍ 마을만들기사업 추진

∙ 공사 완료 : 달산면 옥산2리(‘23. 10.), 축산면 도곡2리(’24. 5.),

창수면 미곡2리(‘25. 8.)

향후계획(’26. 1. ~ )

❍ 농촌중심지 활성화, 기초생활거점조성사업 추진

∙ 공사 착공 : 영해면(’26. 3.)

∙ 공사 준공 : 병곡면(’26. 3.), 남정면(’26. 3.)

❍ 마을만들기사업 추진

∙ 공사 준공 : 병곡면 이천리, 달산면 매일1리, 영해면 연평2리, 창수면 수리

∙ ‘26년도 마을만들기사업 대상지 2개소 추진 예정

기대효과	• 마을단위 문화복지 여건 강화 →주민공동체 활성화 • 주민편의시설, 기반시설 확충으로 경제적 자립 및 인구소멸 대응